붙임 2)

용역과제 제안요구서(RFP)

과 제 명	한국생산기술연구원 동남권지역본부 건설 타당성 연구
연구비/기간	❍ 3,000만원 이내(부가세포함) / ‘11.10.26.~’11.11.20. (4주)
용역 목적 및 목표	❍ 산업기술 출연연구기관의 1개의 지역조직 설립에 관한 정책적·기술적·경제적 타당성 분석을 통해 설립의 객관적 타당성을 검증하고, 효율적인 사업추진 방안을 제시함. - 해당조직 : 한국생산기술연구원 동남권지역본부
용역 내용 및 범위	❍ 설립지역의 연관 산업, 자원, R&D기관 등 사업환경 분석 - 기 설치된 타출연(연) 지역조직 또는 기술지원기관(지역 TP)과의 유사․중복성 검토 - 지리, 교통, 자연환경, 산업경제 등 기초자료 분석 - 중앙 ․ 지방정부 및 본원의 사업추진의지 조사 - 설립지역 R&D 기관, 산업계 현황조사 및 연계협력방안 분석 - 상위계획 및 관련 법/제도 조사 분석 ❍ 지역조직 설립의 경제적, 정책적 타당성 분석 - 경제적 타당성 분석 (비용편익분석) - 정책적 타당성 분석 (국가정책방향과의 관련성, 기존사업과의 연계효과, 중복투자의 가능성, 민간투자의 유치 가능성 분석) ❍ 지역조직 설립 및 사업운영의 효율적 추진을 위한 방안 제시 - 사업계획의 적절성 검토 (예산적정성 및 사업성공가능성) - 효율적인 사업추진 방안 제시 등 ❍ 설립지역의 토지 분석 - 지목, 건축가능 면적, 건축상의 제약요인분석, 신축건물 조감도 등
용 역 추진방법	❍ 기획재정부 “2009년도 예비타당성조사 운용지침”을 참조하여 수행하고 전문가 의견 반영 ❍ 설립 지역산업에 대한 현황분석을 통해 지역조직 설립 기본계획 검토 및 필요성 검증(지역조직 설립․운영 매뉴얼 참조) ❍ 지역조직 설립 및 역할에 관해 지역의 산학연 관련기관들의 의견을 수렴하여 타당성 제고
결과물 활용방안	❍ 타당성 연구용역 결과에 기초하여 설립계획 수립, 이사회 승인 ❍ 향후 지역조직 설립․운영방안의 기초자료로 활용